공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

1-1-1			외국인계절근로자농촌일자리중개센터건립
농촌활력과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	5,000백만원				추진상황 (이행률)	사업예정부지 선정 등 (10%)
추진부서	농정축산과 농촌인력지원팀 (담당자 전호철 ☎ 6677)				협조부서
공약목표	외국인 계절근로자 농촌일자리 중개센터 건립
사업개요	사업위치			봉화군 일원
	사업기간			2022. 7 ~ 2026. 6.
	사 업 량			1,144㎡정도
	사업내용			외국인계절근로자 공동숙식을 위한 기숙사 신축
추진계획	~‘22년			• 공공형계절근로사업공모신청 (외국인계절근로자농촌일자리중개센터운영비지원사업)
	‘23년			• 사업예정부지 확정 • 지방소멸대응기금 공모신청
	‘24년			• 사업부지 매입, 중기지방재정계획 및 투자심사 의뢰 • 실시설계 및 건축공사 착공
	‘25년			• 건축공사 완료 • 외국인 계절근로자 농촌 일자리 중개센터 운영
	‘26년~			• 외국인 계절근로자 농촌 일자리 중개센터 운영
문 제 점 (주민의견)	외국인계절근로자기숙사지원사업(국비)은 전국에 8개소에서 시범사업으로 2023년까지 추진하고 있어 현재 국비 공모사업 계획이 없음
개선방안	농림축산식품부 및 경북도에 지속적으로 사업 건의 지방소멸대응기금 등 국비확보 노력
비 고	중개센터 타당성 조사 용역 실시 중(2023. 4월) 중개센터 진입도로 확장공사 실시설계(2023. 5월 중)

’23. 3월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23. 3월까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
농촌일자리 중개센터 건립	목 표(A)	부지확정	-	부지확정	신축
	실 적(B)	부지확정	-	부지확정	-	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	-	100%	-	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22.  7. : 외국인계절근로자농촌일자리중개센터 건립 계획 수립

◦ ’22. 10. : 사업예정부지 조사(봉성중학교 외 2개소)

◦ ’23.  1. : 공공형계절근로사업 선정

◦ ’23.  3. : 봉성중학교 예정부지 확정

◦ ’23. 11. : 부지매입(공유재산취득)

◦ ’24. ~   : 예정부지 매입, 건축공사 착공

◦ ’25. ~   : 외국인계절근로자농촌일자리중개센터 운영

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-
2024년	3,000	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-	-
2025년	1,000	-	-	500	500	-	-	-	-	-
2026년~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	5,000	0	0	3,000	2,000	0	0	0	0	0

□ 재원 조달방안

◦ 국비 공모사업 신청을 통한 사업비 확보