공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

1-1-4			서벽지역 다목적 농촌용수개발사업
농촌활력과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 □군 ■기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업,비	44,900백만원				추진상황 (이행률)	추진 중(2%)
추진부서	한국농어촌공사 영주봉화지사 (담당자 박영찬 639-5042)				협조부서	농촌활력과 농업기반조성팀 (담당자 권용혁 ☎ 6847)
공약목표	농어촌 용수를 개발하여 복합 영농 기반을 구축하고 농어촌의 환경개선 도모
사업개요	사업위치			봉화군 춘양면 서벽리 820-1(금당골)
	사업기간			2022. ~ 2028.(7년)
	사 업 량			저수지 1개소, 도로 4조 L=2.94km
	사업내용			저수지 1개소(총 저수량 1,282천㎥), 제방 H=49.1m, L=184.0m , 도로 4조 L=2.94km, 용수간선 2조 L=21.9km
추진계획	‘22년 05월			• 세부설계 착수
	‘22년 10월			• 재해 및 환경 영향평가
	‘23년 01월			• 편입용지보상
	‘23년 10월			• 공사 착공
	‘28년			• 공사 준공
문 제 점 (주민의견)	해당없음
개선방안	해당없음
비 고

’23. 3월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23. 3월까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
추진율	목 표(A)	10%	10%	40%	60%	80%	100%
	실 적(B)	10%	10%	10%	-	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	100%	25%	-	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22.  3. : 2023년 신규착수지구 선정

◦ ’22.  5. : 세부설계 착수

◦ ’22. 10. : 재해 및 환경 영향평가

◦ ’23.  1.  : 편입용지보상(진행중)

◦ ’23. 10. ~ ’28. 12.  : 공사 착공 및 준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	300	300	-		-	300	300	-	-	-
2023년	500	500	-		-	500	500	-	-	-
2024년	7,500	7,500	-		-	-	-	-	-	-
2025년	7,500	7,500	-		-	-	-	-	-	-
2026년	7,500	7,500	-		-	-	-	-	-	-
임기후	14,600	21,600
합 계	44,900	44,900	0	0	0	800	800	0	0	0

□ 재원 조달방안

◦ 국비 100%