공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

1 - 3 - 1			봉화형 스마트팜 기반 조성사업
농업기술과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업비	45,600백만원				추진상황 (이행률)	추진 중(10%)
추진부서	농업기술과 스마트청년농업팀 (담당자 권정주 ☎ 6667)				협조부서
공약목표	정보통신 기술을 접목한 첨단 스마트농업 실현으로 농업인구 유입촉진 및 농업소득 증진
사업개요	사업위치			봉화군 봉성면 창평리 일원
	사업기간			2023. ~ 2026.(4년)
	사 업 량			10ha
	사업내용			임대형 스마트팜 단지 조성
추진계획	~‘22년			• 임대형 스마트팜 조성사업 공모
	‘23년			• 사업대상자 선정 및 임대형 스마트팜 조성사업 (1차:3ha) 시행, 농업생산기반 정비사업 승인
	‘24년			• 임대형 스마트팜 조성사업(1차 단지) 준공 • 임대형 스마트팜 조성사업(2차 단지,2ha) 시행
	‘25년			• 임대형 스마트팜 조성사업(2차 단지) 준공
	‘26년~			• 임대형 스마트팜 조성사업(3, 4차단지-5ha) 시행
문 제 점 (주민의견)	- 스마트팜 조성 사업비확보, 대상지선정 및 매입 - 농업생산기반 정비사업 수립 및 승인 절차 이행으로 사업 지연
개선방안	- 사업확장성, 관련 법령 적합성 등 대상지 조속한 매입 추진 - 경상북도 등 상위기관 협의 및 조속한 사업 승인 추진
비 고

’23. 3월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23. 3월까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
스마트팜 조성 (10ha)	목 표(A)	-	-	-	3ha	2ha	5ha
	실 적(B)	-	-	-	-	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		-	-	-	-	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22. 12. : 임대형 스마트팜 단지 조성사업 공모 신청

◦ ’23.  2. : 사업대상자 선정 및 추진계획 승인

◦ ’23.  4. : 민관협의체 구성 및 기본계획 수립

◦ ’23.  5. : 경상북도 투자심사 및 공유재산 심의

◦ ’23. 12. : 토지매입 완료 및 농업생산정비사업 시행계획 승인

◦ ’24.  2. : 공사착공 및 임대농 선발

◦ ’24. 12. : 1차 구역(3ha) 준공 및 운영

◦ ’25. ~  : 연차별 2, 3, 4차 단지 조성 지속 추진

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	6,000	-	1,800	4,200	-	-	-	-	-	-
2024년	9,250	-	-	9,250	-	-	-	-	-	-
2025년	8,500	-	1,200	7,300	-	-	-	-	-	-
2026년	21,850	-	3,000	18,850	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	45,600	0	6,000	39,600	0	0	0	0	0	0

□ 재원 조달방안

◦ 도비재원 증액방안 강구, 소멸기금 신청, 국비사업 매칭으로 국도비 추가확보 지속 노력