공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

1 - 4 - 1			테마형 주택단지 조성 사업
인구전략과
사업구분	□신규사업 ■계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	25,076백만원				추진상황 (이행률)	추진 중(25%)
추진부서	인구전략과 정주기반팀 (신우재, 허유정 ☎ 6148,6150)				협조부서	종합민원실 외 인허가부서
공약목표	도시민 유치 및 정주여건 개선을 위한 봉화전원주택단지 조성
사업개요	사업위치			봉화군 일원(삼계리, 북지리, 소로리, 도심리)
	사업기간			2019. ~ 2025.(7년)
	사 업 량			5개 지구, 125호(택지분양 110호, 작은정원 15호)
	사업내용			- 전원주택단지 부지 및 기반시설 조성 - 도시민 체류형 농촌체험주택단지 조성 - 민간주도 전원주택단지 기반시설 구축비용 지원
추진계획	~‘22년			• 삼계‧도심지구 실시설계용역 진행 • 북지지구(도시민 체류형 농촌체험주택단지) 기본계획 수립 및 실시설계 발주 준비 • 소로지구 기반시설 착공
	‘23년			• 삼계‧도심지구 사업계획 통합심의 및 대지조성사업 승인, 도심지구 기반시설 착공 • 북지지구(도시민 체류형 농촌체험주택단지) 착공 • 소로지구 기반시설 완공 및 분양 계약
	‘24년			• 삼계지구 기반시설 착공, 완공 및 분양 계약 • 도심지구 기반시설 완공 및 분양 계약 • 북지지구(도시민 체류형 농촌체험주택단지) 완공 및 위탁운영자 선정
	상시			• 민간주도형 전원주택단지 조성 지원사업 홍보 및 유치
문 제 점 (주민의견)	전원주택 조성공사 인근지역 주민 피해(소음, 먼지 등) 예상
개선방안	주민 의견수렴을 통해 협의점 도출
비 고

’23. 3월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23. 3월까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년
분양계약 완료	목 표(A)	0지구	0지구	1지구	3지구
	실 적(B)	0지구	0지구	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		0%	0%	20%	-

□ 추진경과 및 계획

【주택단지 지구별 계획】

구 분	사업 기간	사업규모 (호)	사업비(백만원)				2022년까지 추진실적	2023년 추진계획	비고
			총사업비	기투자	2023	향 후
계		110	25,076	11,906	3,050	10,120
삼계지구 (81,288㎡)	2019～ 2025	40	6,282	1,482	0	4,800	․편입부지 매입완료 ․지구단위계획수립 및 실시설계용역 추진	․지구단위계획수립 및 실시계획인가신청	2024 착공
북지지구 (55,796㎡)	2019～ 2025	15	7,007	3,577	0	3,430	․편입부지 매입완료 ․지구단위계획수립 및 실시설계용역 추진	․군관리계획재정비 시 용도지역변경 추진 ․사업부지 내 작은정원 조성사업 연계 추진	2025 착공
소로지구 (22,714㎡)	2019～ 2023	25	5,779	4,729	1,050	0	․시설공사 착공 및 1차분 준공	․시설공사 완료 ․분양계획 수립 및 계약	2022 착공
도심지구 (52,130㎡)	2019～ 2024	30	6,008	2,118	2,000	1,890	․편입부지 매입완료 ․지구단위계획수립 및 실시설계용역 추진	․대지조성사업 승인 신청 및 사업발주	2023 착공

【경북형 작은정원】

◦ ’22. 12. : 기본계획수립 및 실시설계 발주 준비

◦ ’23.  4. : 기본계획수립 및 실시설계 용역 착수

◦ ’23.  8. : 관계기관 협의(경북도, 대구지방환경청 등)

◦ ’23.  9. : 사업자 선정 및 착공

◦ ’24. 10. : 사업완료 및 위탁운영자 선정(공약이행 완료)

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	7,489	-	-	7,489	-	7,489	-	-	7,489	-
2022년	4,417	-	1,000	3,417	-	4,417	-	1,000	3,417	-
2023년	4,050	-	1,000	2,050	1,000	4,050	-	1,000	2,050	1,000
2024년	3,890	-	-	3,890	-	-	-	-	-	-
2025년	5,230	-	-	5,230	-	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	25,076	-	2,000	22,076	1,000	15,956	-	2,000	12,956	1,000

□ 재원 조달방안

◦ 자체재원 22,076백만원

◦ 인구소멸기금(소로지구) 1,000백만원

◦ 도 공모사업 선정(경북형 작은정원 조성사업) 도비 2,000백만원